5-2	진례보건지소 신축
추진부서		보건관리과(서부) / 보건행정팀 / 박선미 / 7973
추진상황		이행완료	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘23) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2021. 2. ~ 2023. 10.

❍ 위    치 : 김해시 진례면 송정리 22외 1필지

❍ 총사업비 : 2,228백만원(국 823 도 205 시 1,200)

❍ 사업내용 : 노후화된 진례면 보건지소 이전 신축으로 보건의료서비스 질 향상

❍ 사업규모 : 대지면적 1,254㎡, 연면적 658.33㎡ (지상2층)

층 별	세부시설	건축면적	비 고
지상 1층	일반진료실, 한의진료실, 건강증진실, 공중보건의 숙소	330.55㎡
지상 2층	프로그램실, 세미나실	327.78㎡

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.
사업내용	- ‘22. 1.~10.: 관련법규 검토 및 실시설계 - ‘22. 11.: 공사 계약 - ‘22. 12.: 공사 착공	- ‘23. 8.: 공사준공 - ‘23. 11.: 개소	-	-
추진율	30%	100%	-	-

2) 주요 추진성과

❍‘21. 7.~11  : 공공건축 심의 및 계획설계용역 완료

❍‘21. 12.    : 한국건강증진개발원 계획설계 심의 완료

❍‘22. 1.~ 7. : 관련법규 검토 및 실시설계 완료

❍‘22. 8.~11. : BF 예비인증 및 공사 입찰

❍‘22. 12.    : 공사 착공

❍‘23. 8.     : 공사 준공

❍‘23. 11. 1. : 진례면보건지소 개소

3) 향후 추진계획

❍ 지역특성과 주민의 욕구를 반영한 맞춤형 건강증진사업 운영