6-15	가야사 2단계사업 내 가야시민공원 조성
추진부서		문화유산과 / 문화재복원팀 / 유진우 / 4663
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내 ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2006. ~ 2030.

❍ 위    치 : 구산동 199번지 일원

❍ 규    모 : 93,485㎡(구지봉 보호구역)

❍ 내    용 : 교육시설 보상, 종합정비계획 수립, 발굴조사, 환경정비 등

❍ 총사업비 : 140,000백만원(국비 98,000, 도비 17,721, 시비 24,279)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 교육시설 보상 완료 ○ 서중학교 철거 완료	○ 발굴조사 시행	○ 교육지원청 이전 및 철거	○ 건설공고 이전 및 철거 ○ 발굴조사 시행	○ 구봉초교 이전 및 철거 ○ 정비계획 수립 ○ 공원조성 완료

2) 주요 추진성과

❍ ‘18.  9. : 구지봉 문화재보호구역 지정 고시

❍ ‘22.  6. : 교육시설(교육지원청, 서중학교, 건설공고, 구봉초) 보상 완료

❍ ‘22. 10. : 서중학교 철거 완료

❍ ‘23.  6. : 구지봉 문화재구역 시굴조사 완료

❍ ‘23.  8. : 구지봉 문화재구역 정밀발굴조사 용역 착수

❍ ‘23. 12. : 구지봉 문화재구역 정밀발굴조사 용역 완료, 교육지원청 이전

3) 향후 추진계획

❍ ‘24.        : 교육지원청 철거 및 문화재 조사

❍ ‘26. ~ 28.  : 교육시설 단계적 이전 발굴조사, 종합정비계획 수립

❍ ‘30. 12.    : 가야시민공원 조성 완료(예정)

❏ 중점 추진사항

❍ 사업부지에 대한 유적의 성격 및 가치를 바탕으로 종합정비계획 수립 가능

⇨ 문화재청 사업지침에 따라 교육시설 단계별 이전(교육청)·철거 후 발굴조사를 통해 유적의 성격 및 가치를 규명하고 종합정비계획 수립 및 가야시민공원 조성