6-18	진례도예촌 활성화
추진부서		도시계획과 / 도시계획팀 / 김기훈 / 3593
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타	완료시기	□ 임기내 ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2018. ~ 2031.

❍ 위    치 : 김해시 진례면 송정리, 시례리 일원

❍ 규    모 : 약42.3만㎡ (자연녹지지역, 개발제한구역)

❍ 사 업 비 : 약2,200억원

❍ 시 행 자 : 경남개발공사

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○기술타당성 검토 및 기본구상(안) 수립	○기술타당성 검토 및 기본구상(안) 수립	○전문기관(지방 공기업평가원) 타당성 검토	○이사회 및 도 의회 신규사업 동의안 의결 ○GB해제 입안	○도시개발구역 지정 및 부지 조성

2) 주요 추진성과

❍ ’21. 11. : 양해각서 체결(김해시↔경남개발공사)

❍ ’23. 12. : 기술타당성 검토 및 기본구상(안) 수립 중

3) 향후 추진계획

❍ ’24.  2. : 기본구상(안) 최종 협의(김해시↔경남개발공사)

❍ ’24.  3. : 기술타당성 완료 및 전문기관(지방공기업평가원) 타당성 검토
❍ ’25.  3. : 이사회 및 도의회 신규사업 동의안 의결

❍ ’25. 10. : GB해제 신청

❍ ’26. 12. : GB해제 고시(결정권자 : 경상남도)

❍ ’27.  1. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 승인 신청

❍ ’28.  6. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 승인(결정권자 : 김해시장)

❍ ’28. 12. : 실시계획 승인 및 보상 착수

❍ ’29.  7. : 부지조성 공사 착수

❍ ’31. 12. : 사업 완료

❏ 중점 추진사항

❍ 도예촌 위주의 사업 추진 시 사업성 확보 어려움이 예상되므로 고밀도 공동주택 용지 조성이 불가피하나 개발제한구역 해제(승인권자 : 국토부) 난항 예상

⇒ 사업의 당위성에 대해 국토부와 적극 협의 추진

· 국내 유일의 분청도자기 생산지역으로 분청도자기 전통 계승과 활성화를 위해 지역 내 산재된 도예업체의 집적화 필요