6-23	청소년 활동지원 문화센터 구축
추진부서		아동청소년과 / 청소년팀 / 이효심 / 2653
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. 1. ~ 2024. 4.

❍ 시 설 명 : 김해시청소년문화복지센터

❍ 위    치 : 월산로 120(부곡동 802-8)

❍ 규    모 : 지하 1층, 지상 3층(연면적 2,498㎡), 부지 1,905㎡

❍ 사 업 비 : 9,713백만원(도 5,600  시 4,113)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024. 9.	2025.	2026. ~
청소년 문화복지센터 건립	설계 준공 및 공사 착공	공사	준공 및 개관	시설운영	시설운영
추진율	5%	65%	100%	지속추진

2) 주요 추진성과

❍ 2022.  3. : 주민설명회 개최

❍ 2022. 11. : ‘23년까지 도비 5,600백만원 확보

❍ 2022. 12. : 특별조정교부금 1,532백만원 확보

❍ 2023. 10. : 청소년문화복지센터 운영방안 검토 보고, 공공위탁 적정성 검토

❍ 2023. 12.  : 조례 제정, 공공위탁 시의회 동의

3) 향후 추진계획

❍ 2024. 1.~2. : 위수탁계약, 시설명칭 확정

❍ 2024. 4.    : 준    공

❍ 2024. 5.~8. : 내부 리모델링, 기자재구입, 시범운영 등
❍ 2024. 9.    : 개    관

❏ 중점 추진사항

❍ ‘24 당초예산에 자산및물품취득비 750백만원 요구하였으나 500백만원 반영

- ‘24.4월 준공 후 확보된 예산으로 중요자산 및 물품 우선 구입

- 청소년수련시설의 원활한 운영을 위하여 삭감된 예산 250백만원 1회 추경 확보 및 ‘24.9월 개관 전 구입 완료