2-2	김해관광유통단지 조속 추진
추진부서		도시계획과 / 도시계획팀 / 최현식 / 3596
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타	완료시기	□ 임기내(‘25) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 1996. 6. ~ 2028. 12.(단지조성사업 준공: '13.9.9.)

❍ 위    치 : 김해시 신문동 1411번지 일원

❍ 규    모 : 878,127.8㎡

❍ 총사업비 : 1조 2,974억원(기반시설 3,193, 상업시설 9,781)

❍ 사업내용 : 호텔, 콘도 및 노유자시설, 대규모점포, 테마파크, 종업원숙소 양도양수

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○호텔 착공 ○테마파크 착공	○물류단지 재정비(안) 수립	○호텔준공 ○물류단지 재정비계획 확정	○재정비계획 승인 ○종업원숙소 양수 ○시행계획 승인	○대규모점포 착공 ○노유자시설 착공

2) 주요 추진성과

❍ ’96.  6. : 민간개발자 선정(롯데쇼핑외 2) 및 협약체결

❍ ’96. 12. : 유통단지 지정 및 개발계획수립

❍ ’08. 12. : 1단계 사업 완료(농수산유통센터, 아울렛몰, 물류센터)

❍ ’13.  9. : 유통단지 조성사업(부지) 준공

❍ ’15.  6. : 2단계 사업 완료(시네마․아울렛증축, 워터파크)

❍ ’24.  1. : 스포츠센터(수영장) 개장

❍ ’24.  7. : 물류단지 (부분)재정비사업 사무권한 위임(도→시)

❍ ’24.  7. : 공동사업추진 업무협약 체결(시·롯데)

❍ ’24. 10. : 호텔 및 테마파크 오픈

3) 향후 추진계획

❍ ’25.  1. : 물류단지 재정비계획 수립·고시

❍ ’25.  2. : 종업원숙소 양도·양수 추진

❍ ’25.  5. : 재정비사업 시행계획 승인

❍ ’28. 12. : 상부시설 전체 준공