2-20	장유 신문지구 도시개발사업 안정적 추진
추진부서		도시개발과 / 도시개발팀 / 허영언 / 3615
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타	완료시기	□ 임기내(’25) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2020. 4. ~ 2026. 12. 31.

❍ 위    치 : 신문동 26-8번지 일원

❍ 규    모 : 556,561m2 (168천평)

❍ 총사업비 : 2,107억원 (민간자본)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 토공사 (지반개량 및 지방도로이설)	○ 토공사 (지반개량 및 지방도로이설)	○ 기반시설공사 (우수, 오수, 상수도, 도로)	○ 기반시설공사 (우수, 오수, 상수도, 도로))	○ 사업완료 (공사완료 공고)
추진율	20%	40%	60%	80%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ’13.  3. : 도시개발구역(개발계획포함) 지정 제안

❍ ’17.  7. : 도시개발구역(개발계획 수립) 지정

❍ ’18.  2. : 조합설립인가 및 도시개발사업 시행자 지정

❍ ’20.  4. : 실시계획 인가

❍ ’20.  5. : 착공

❍ ’21. 12. : 실시계획(변경) 인가(확정측량)

❍ ’22.  5. : 환지계획인가

❍ ’23.  4. : 학교용지 개발방안 업무협의(도교육청, 사업시행자, 우리시)

❍ ’23.  9. : 개발계획 변경수립 및 실시계획 변경인가(기한연장)

❍ ’24.  3. : 개발계획 변경수립 및 실시계획 변경인가(인구수용계획, 임대주택건설계획)

3) 향후 추진계획

❍ ’25.  9. : 초등학교 개교

❍ ’26. 12. : 공사완료 공고(사업완료)