2-27	경남예술교육원 건립 지원(예술학교 기능통합 운영)
추진부서		인재육성과 / 인재육성팀 / 김주연 / 3474
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 도교육청	완료시기	□ 임기내 ■ 임기후(‘31)

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022 ~ 2031

❍ 위    치 : 부원동 39번지(김해중학교 부지)

❍ 규    모 : 부지 18,610㎡ / 연면적 6,276㎡(공연장 700석, 예술체험관 3층 32실)

❍ 총사업비 : 약343억원(추정)

❍ 건립/운영 : 경남도교육청

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 기본계획 및 기본 설계 용역 결과 공유 및 협의 (김해시↔도교육청)	○사업추진 실무협의 (김해시↔도교육청)	○신설 부지 변경 협의 (삼방동→김해중 부지) ※ 시장-도교육감 간담회 결과	○신설 부지 확정 (김해중 부지) ○기관설립 기본계획 수립(도교육청)	○타당성조사 연구 용역(도교육청) : ‘26. ○재정투자심사 및 도시계획시설 변경 (도교육청, 김해시) : ‘27. ○실시설계(도교육청) : ‘28. ○공사 착공, 준공, 개관 (도교육청) : ‘29. ~ ‘31.
추진율	10%	30%	50%	80%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘22.  9. : 민선8기 공약사항 변경(김해예술학교 건립지원 → 경남예술교육원 건립지원)

❍ ‘22. 11. : 기본계획 및 기본설계 용역 결과 공유 및 협의(삼방동 산55번지)

❍ ‘23.  1. ~ 12. : 사업추진 실무협의(도교육청↔김해시)

❍ ‘24.  2. : 시장-도교육감 현안 논의(삼방동→김해중 부지 변경 검토)

❍ ‘24.  7. : 시장-도교육감 교육현안 논의(김해중 부지 건립으로 최종 협의)

3) 향후 추진계획

❍ ‘25.  4. : 신설부지 확정(김해중 부지)

❍ ‘25. 하반기 : 기관 설립 기본계획 수립(도교육청)

❍ ‘26.     : 타당성 조사 연구용역(도교육청)

❍ ‘27.     : 재정투자심사 및 도시계획시설 변경(학교용지→공공공지)

❍ ‘28.     : 실시설계(도교육청)

❍ `29. ~ ‘31. : 공사 착공, 준공, 경남예술교육원 개관

❏ 기대효과

❍ 예술교육 종합 허브기관으로 예술교육의 정보제공 및 예술교육 프로그램 개발․보급

❍ 누구나 참여할 수 있는 폭넓은 예술체험과 표현이 가능한 환경조성