2-5	산업단지 복지시설 확충
추진부서		도시개발과 / 산업단지관리팀 / 전용진 / 0983
추진상황		정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(’25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 사 업 명 : 진영죽곡농공단지 복합문화센터 건립사업

❍ 기    간 : 2022. 5. ~ 2025. 12.

❍ 위    치 : 진영읍 죽곡리 8-4번지

❍ 규    모 : 건물4층, 연면적 985.24㎡ (부지면적 : 1,623.6㎡)

❍ 총사업비 : 5,087백만 원(국비 2,700, 특조 147, 시비 1,443, 현물출자 797)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 공유재산 ○ 투자심사	○ 공공건축심의 ○ 건축 설계공모	○ 실시설계 ○ 공사착공	○ 공사준공	※ 임기내 완료
추진율	5%	25%	30%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ’22.  3. 23. : 공모사업 선정

❍ ’22.  4. 29. : 협약 체결(김해시, 한국산업단지공단)

❍ ’22. 10. 20. : 공공건축 기획심의(조건부,경상남도)

❍ ’22. 10. 21. : 지방재정 투자심사 승인

❍ ’22. 11. 28. : 공유재산 관리계획 의회승인

❍ ’23.  6.  7. : 공공건축 심의(조건부)

❍ ’23. 12.  5. : 건축 설계공모 심사결과 공고

❍ ’23. 12. 28. : 설계용역 착수

* 사업시행 : 건축과(전문부서 시행)

❍ ’24.  6. 12. : 변경협약 체결(사업기간 연장 ’22. 5. ~ ’25. 4. ⇒ ’22. 5. ~ ’25. 12.)

❍ ’24. 10. 18. : 방침보고(시설물 운영주체 및 공간별 활용계획 확정)

3) 향후 추진계획

❍ ’24. 12. : 사업착공

❍ ’25. 12. : 사업완료

※ 향후 산업단지 내 공공시설 활용 근로자 복지증진에 노력

❏ 문제점 및 해결방안

❍ 설계 결과 예정공사비 증액(11억원)이 불가피하여 사업비 추가 확보 필요

⇒ ‘25년 특교세 및 제1회 추경예산 등으로 추가 사업비 확보하여 사업 추진