3-13	대동 생태체육공원 활성화
추진부서		하천과 / 국가하천팀 / 강희정 / 4823
추진상황		이행 후 계속	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘23) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

❍ 위    치 : 대동면 조눌리 일원

❍ 규    모 : 국가하천 수변공간 A=158,000㎡

❍ 총사업비 : 3,000백만원(국 2,300, 시 700)

❍ 사업내용 : 녹지 등 생태 정원 및 운동기구 등 조성

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024. 7	2025.	2026. ~
사업내용	○2022년 낙동강 둔치 여가녹지조성 사업준공 ○2023년 개발 제한구역 주민 지원사업 선정	○2023년 낙동강 둔치 여가녹지 조성사업(2차) A=62,372㎡ 행정절차 이행	○2023년 낙동강 둔치 여가녹지 조성사업(2차) 완료	○생태정원 유지 관리	○생태정원 유지 관리
추진율	80%	90%	100%	100%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘20.  9. : 개발제한구역 주민지원사업 선정

❍ ‘21. 12. : 21년도 사업 완료

❍ ‘22.  7. : 22년도 사업(1차) 완료

❍ ‘23.  1. : 23년 사업(2차) 실시설계용역 발주

❍ ‘23.  4. : 실시설계완료 및 소규모환경영향평가 용역 착수

❍ ‘23.  5. : 개발제한구역 행위허가 신청 및 하천점용 허가, 소규모환경영향평가 신청

❍ ‘23.  7. : 소규모환경영향평가 보완에 따른 정밀 조사(맹꽁이 서식지) 용역 시행

❍ ‘23. 10. : 소규모환경영향평가 협의 완료

❍ ‘24.  1. : 하천점용(변경) 허가 완료(낙동강유역환경청→김해시)

❍ ‘24.  2. : 김해시 도시계획위원회 심의 및 개발제한구역 행위허가 완료(도시계획과)

❍ ‘24.  3. : 23년도 사업 공사 착공

❍ ‘24.  7. : 23년도 사업 공사 준공

3) 향후 추진계획

❍ 생태정원 지속적 유지 관리

❏ 기대효과

❍ 개발제한구역 내 쓰레기 등으로 오염된 낙동강 수변공간을 친환경적인 친수

공간으로 변모

❍ 야생화 단지, 잔디광장 조성 등을 조성하여 시민들에게 휴식공간 및 지역행사

공간 제공