3-15	친환경 생태하천 복원(조만강)
추진부서		하천과 / 지방하천팀 / 김현경 / 3814
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.

❍ 위    치 : 주촌면 원지리 원지교 ~ 명법동 정천교 일원

❍ 규    모 : 생태하천 복원 L=5.36km

❍ 사 업 비 : 22,740백만원(도 62%, 시 38%)

❍ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=1.71km, 인공습지 2개소, 수질정화습 5개소,

징검여울, 어류서식처, 생태학습장, 생태탐방로 등

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.
사업내용	○생태하천복원 L=2.0km	○생태하천복원 L=1.0km	○생태하천복원 L=1.0km	○생태하천복원 L=1.36km
추진율	30%	50%	65%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘18.  7. : 생태하천 복원사업 공모 선정

❍ ‘21.  8. : 공사 착수

❍ ‘23.  5. : 1차분 준공

❍ ‘23.  8. : 2차분 준공

❍ ‘24.  7. : 총사업비[증가분] 협의 완료(경상남도) 약 18억원

❍ ‘24. 11. : 사업예산 211억원 확보

※ 2025년 예산 : 42억원

❍ ‘24. 12. : 3, 4차분 공사 준공 추진

3) 향후 추진계획

❍ ‘25.    : 사업준공

❏ 기대효과

❍ 자연친화형 하천조성으로 하천생태기능 향상 및 하천오염 방지

❍ 주촌선천지구 등 도시개발로 인해 훼손된 하천의 생태 복원으로 주민휴식공간 제공