3-18	가야랜드 부지 활용 생태휴식공원 조성
추진부서		도시계획과 / 도시계획팀 / 김기훈 / 3593
추진상황		정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 위    치 : 김해시 삼방동 792번지 일원(가야유원지)

❍ 규    모 : 약60,000㎡

❍ 사 업 비 : 약20억원

❍ 사업내용 : 생태휴식공원 조성

- 주요시설 : 둘레길(데크) 1식, 보도교 1개소, 휴식공간 조성 등

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○추진방안 협의 (시↔가야개발)	○추진방안 협의 (시↔가야개발)	-	○도시관리계획 변경 ○생태휴식공원 조성 (‘26.6월 준공)	※ 임기내 완료
추진율	10%	15%	15%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ’22. 12. 2. : 가야유원지 내 생태휴식공원 조성 추진방안 협의(시↔가야개발)

- 가야개발 : 유원지 내 소류지 일원 6만㎡ 토지사용 승낙, 상시 개방

- 김해시 : 조성계획변경, 실시설계, 생태휴식공원 조성 및 유지관리

❍ ’23. 12. : 생태휴식공원 추진계획 가야개발 이사회 의결(원안가결)

3) 향후 추진계획

❍ ’25.  1. : 유원지 조성계획 변경 및 실시설계 용역 발주

❍ ’25.  6. : 유원지 조성계획 변경 고시 및 실시계획인가

❍ ’25.  8. : 생태휴식공원 조성공사 착공

❍ ’26.  6. : 생태휴식공원 조성공사 준공

❏ 문제점 및 해결방안

❍ 생태휴식공원 조성 용역비 및 공사비 확보 필요(용역비 1억원 ’24년 2회추경 미반영)

⇒ ’25년 당초예산 확보 추진