3-25	맑은 물 순환센터 시설정비
추진부서		하수과 / 공공하수팀 / 이목섭 / 3965
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내 ■ 임기후

❏ 사업개요

구 분	공공하수처리시설 악취개선사업	맑은물순환센터 대수선	하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업
사업기간	‘21. 3. ~ ‘23. 9.(완료)	계속	‘22. 6. ~ ‘27. 6.
위 치	화목맑은물순환센터 외 7개소	관내 맑은물순환센터	화목맑은물순환센터 내
사업내용	- 탈취기 12대 신설‧보수 - 탈취덮개 3,213㎡ 등	- 고효율 송풍기 외 53건	- 증설 100톤/일 (100 → 200)
사 업 비	8,705백만원 (국5,718 기896 도1,046, 시1045)	21,712백만원 (시21,721)	43,896백만원 (국30,727 도6,585 시6,584)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분		임기 내				임기 후
		2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	악취개선	○공사 착공 (공정률 39%)	○공사 준공 (공정률 100%)
	대수선	○화목 송풍기 교체 외 10건	○화목 가스저장조 수선 외 10건	○진영 분리막 외 14건	○자원화 탄화로 교체 외 6건	○장유 소화조 개량 외 10건
	자원화 처리시설 증설사업	○기본계획 수립	○한국환경공단 위수탁 협약체결 ○입지선정 ○입지선정계획 결정·공고	○기본설계/입찰 안내서 작성 수행 ○인허가용역 착수	○시설공사 입찰 공고 ○재원협의	○실시설계 후 시설공사 착공

2) 주요 추진성과

악취개선사업	대수선사업	자원화처리시설 증설사업
○`22. 1 : 실시설계 준공 ○`22. 4 : 1차분 발주 ○`22. 11 : 1차분 설계 변경 - 추진성과 ‧ 탈취기 12대 설치완료 ‧ 탈취기 배관 설치 중 ○`23. 1 : 2차분 발주 ○`23. 10 : 전체 준공	○`22. 2 : 추진계획 보고 ○`22. 3. : 대수선사업 11건 추진 - 추진성과 ‧ 탄화로 내화물 수선 완료 ‧ 탈수기 교체 준공 ‧ 섬유여과막 교체 준공 ○`23. 1. ~ 12. : ‘23년 대수선 추진 - 화목 가스저장조 수선 외 10개 사업 완료 ○`24. 1. ~ 12. : ‘24년 대수선 추진 - 진영 분리막 교체 외 14개 사업 완료	○`20.3 ~ 8. : 기술진단(한국환경공단) ○`20.10~`21.1 : 타당성조사 용역 ○`21. 3 : 국고보조사업 신청 ○`21.11 : 국고보조사업 확정내시 통보 ○`22. 6 : 기본계획 수립용역 착수 ○`23. 3. : 2차 자문위원회 개최 ⇒ 소각방식 결정 ○`23. 11. : 위수탁협약체결 (⇒한국환경공단) ○`23. 12. : 제1차 입지선정위원회 개최 ○`24. 1. : 제2차 입지선정위원회 개최 ○`24. 8. : 증설사업 폐기물시설촉진법 대상 여부 질의 및 회신 ⇒ (환경부) 폐촉법 대상 아님 ○`24. 10. : 주민 반대대책위원회 간담회 개최

3) 향후 추진계획

악취개선사업	대수선사업	자원화처리시설 증설사업	비고
사업 완료	○`25. 1. : ‘25년 대수선사업 추진계획 보고 ○`25. 2. : `24년 대수선사업 발주 ○`25. 12. : ’25년 대수선사업 준공	○`26. 12. : 공사 착공

❏ 기대효과

❍ 고효율·노후 기자재 교체를 통한 하수처리시설 운영비 절감에 기여

❍ 자원화처리시설 폐열 활용으로 에너지 자립률 향상 및 공공하수처리시설에 대한 탄소중립 이행을 위한 기반 조성