3-7	플라스틱 등 재활용인프라 구축사업 추진
추진부서		자원순환과 / 자원시설팀 / 성동수 / 3396
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. ~ 2026.

❍ 위    치 : 진영읍 설창리 820

❍ 규    모 : 재활용품 선별시설 85톤/일(기존 64톤/일)

❍ 사 업 비 : 19,526백만원(국비 30%, 도비 21%, 시비 49%)

❍ 사업내용

- 현재 운영 중인 재활용품 선별장 노후 설비 교체 및 시설물 증축 리모델링

- 재활용품 선별시설 자동화 리모델링으로 선별율 향상 및 안정적 재활용 인프라 구축

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	~ 2023.	2024.	2025.	2026.3.	2026. ~
사업내용	○총사업비 변경 협의 ○기본 및 실시 설계 착수	○기본 및 설계 용역 완료 ○공사발주 및 착공	○토목,기계공사 ○건축 공사 ○기자재 설치	○공사준공	-
추진율	-	3%	80%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘23.  6. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ ‘23. 12. : 용역 중간 보고

❍ ‘24.  3. : 총사업비 변경 승인(195억원)

❍ ‘24.  4. : 공유재산 관리계획 변경 심의 가결

❍ ‘24.  5. : 설계 경제성 검토(VE) 용역 완료

❍ ‘24.  7. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ ‘24. 11. : 건설사업관리 및 건설공사 발주

❍ ‘24. 12. : 공사 착공

3) 향후 추진계획

❍ ‘26.  3. : 공사 준공