4-15-1	국지도60호선 조기개통(생림~상동)
추진부서		도로과 / 도시도로팀 / 추원철 / 3833
추진상황		이행완료	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 ■ 도 □ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘23) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2008년 ~ 2023년

❍ 위    치 : 김해시 생림면 나전리 ~ 상동면 매리

❍ 규    모 : 도로건설 L=8.82km, B=20m(4차로)

❍ 총사업비 : 209,160백만원 (공사비 120,192 보상비 81,000 기타 7,698)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 모산교 구조물 시공	○공사 준공 (‘23. 5.)	-	-	-
추진율	96%	100%	%	%	%

2) 주요 추진성과

❍‘18.  2. : 상나전교차로 ~ 대감교차로 부분 개통(L=5.4km)

❍‘21.  9. : 대감터널 설치 완료

❍‘22.  1. : 포산마을 보강토 옹벽 시공

❍‘23. 11. : 대감교차로~상동교차로(L=0.8km, 4차로) 우선 개통

❍‘24. 12. : 공사 준공

※대감터널 주변 사면 유실, 보강계획 검토 등으로 준공기한 연기예상

❏ 기대효과

❍ 경남도의 중부지역을 동서로 연결하는 주요 간선도로망 구축으로 지역 개발 촉진

❍ 대구~부산간 고속도로와 연결하여 원활한 산업물동량 수송 도모