4-16	소방도로 정비(전하동, 동상동)
추진부서		도로과 / 도시도로팀 / 황채혁 / 3834
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

전하동

동상동

❏ 사업개요

❍ 사 업 명 : 전하동 도시계획도로(소2-628호선) 개설공사

❍ 위    치 : 김해시 전하동 322-1번지 일원

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=240m, B=8m

❍ 총사업비 : 1,220백만원(공사비 520 보상비 700)

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

연도별	2022. 7.	2023	2024	2025	2026
사업내용	지구단위계획변경용역시행	지구단위계획변경완료 및 실시계획인가 승인	협의보상추진 및 공사 착공	공사 준공	-
추진율				100%	100%

2) 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024년	비고
합 계	1,220	150	400	300
시 비	820	500	-	300
도 비	400	-	400	-

3) 주요 추진 성과

❍‘21.  8. : 지구단위계획구역내 노선 변경 용역

❍‘23.  5. : 지구단위계획 변경 완료

❍‘24.  3. : 실시계획인가 승인

❍‘24.  4. : 보상계획 열람 공고

❍‘24.  6. : 편입부지 감정평가 실시

※ 전체 27필지 2,361㎡ 중 26필지 2,318㎡ 보상 완료(98%)

4) 향후 추진계획

❍‘24. 10. : 공사 착공

❍‘25. 12. : 공사 준공

❏ 사업개요

❍ 사 업 명 : 동상3통(소2-9, 소3-5호선)

도시계획도로 개설공사

❍ 위    치 : 김해시 동상동 329-7번지 일원

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=330m, B=6~8m

❍ 총사업비 : 4,000백만원

(공사비 1,000 보상비 3,000)

❍ 기    간 : 2018년 ~ 2025년

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○실시계획인가 승인	○편입토지 보상 추진	○보상완료 (‘24.12.)	○공사착공 및 준공 (‘25.12.)	-
추진율	5%	30%	50%	100%	100%

2) 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024이후	비고
합 계	4,000	450	2,000	1,550
도 비	450	450	0	0
시 비	3,550	0	2,000	1,550

3) 주요 추진성과

❍‘18. 12. : 실시설계용역 완료

❍‘23.  3. : 실시계획인가 승인

4) 향후 추진계획

❍‘25. 12. : 편입부지 보상 완료

❍‘26.  1. : 공사 착공

❍‘26. 12. : 공사 준공

❏ 기대효과

○ 도로개설에 따른 교통량 분산으로 통행불편 해소, 지역개발 촉진 및 주민생활

편의 증진