4-18	진례 복합레저스포츠파크 조성
추진부서		도시개발과 / 민자사업팀 / 권오현 / 6703
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타	완료시기	□ 임기내(’25) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2005. 6. ~ 2026. 12.

❍ 위    치 : 진례면 송정리 외 5개리 일원

❍ 규    모 : 3,754천㎡ (골프장 2,374, 운동장 177, 주택단지 995, 도로 등 208)

❍ 총사업비 : 10,062억원 (민간자본)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○도시계획시설 (도로:대로3-6) 실시계획변경 인가(기간연장)	○도로공사 착공 (대로3-6호선) (현장사무실 설치 및 토공작업)	○도시계획시설사업 (골프장) 공사 착공	○도시계획시설사업 (골프장, 운동장, 도로) 추진 ○도시개발사업 부분 준공	○전체사업 완료 ○운동장, 도로 시설물 인수 및 법인 청산
추진율	38%	48%	60%	90%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ’19.  5. : 도시개발사업(시례지구) 착공 (현 공정률 99%)

❍ ’22.  3. : 시례지구 도시개발사업 공동주택부지 1차 공급

❍ ’23.  2. : 도시계획시설(도로)사업 착공

❍ ’23.  9. : 중앙도시계획위원회 심의 (시례지구 개발계획 변경)

❍ ’24.  5. : 골프장(27홀) 착공

❍ ’24.  7. : 주주협약 변경 체결

❍ ’24. 11. : 개발계획 변경 협의(국토교통부)

❍ ’24. 12. : 시민배심원 총괄보고로 사업 완료 기간 조정

❍ ’24. 12. : 체육시설(운동장) 세부 종목 확정 및 국토부 사전 협의

3) 향후 추진계획

❍ ’25.  7. : 시례지구 도시개발사업 부분 준공

❍ ’26.  9. ~ 11. : 도시계획시설사업(골프장, 운동장, 도로) 준공

❍ ’26. 12. : 도시계획시설사업(운동장, 도로) 시설물 인수 및 법인 청산

※ 골프장 계획 변경[당초 : 퍼블릭 36홀+피칭연습코스 9홀 ⇒ 변경 : 퍼블릭 45홀]에 대하여 국토교통부는 중앙도시계획위원회 심의 대상(중대한 변경) 판단

⇒ 중앙도시계획위원회 심의 신청을 위한 국토교통부 사전 협의 추진(’24. 12월)