4-19	김해시 축구센터 건립
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 이양규 / 3604
추진상황		일부추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2023. ~ 2026.

❍ 위    치 : 진례면 신안리 151번지 일원(김해스포츠레저타운 내)

❍ 규    모 : 축구센터(연면적 50,000m2), 축구장 4면 등

❍ 총사업비 : 620억원(사업시행자 시설물 조성 후 기부체납)

❍ 사업내용 : 축구장 4면, 축구센터(관리실, 숙소 등) 등

❍ 시 행 자 : ㈜록인 김해레스포타운

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 사업자 협의	○ 지역주민 의견 수렴 및 계획 수립	○ 축구센터 시설 건립 세부사항 협의((주)록인)	○ 축구센터 건립 공사	○ 사업 준공
추진율	5 %	25 %	50%	80 %	100 %

2) 주요 추진성과

❍ 23. 1. ~ 10. : 체육시설 세부협의(진례면체육회 등 5회)

※ 23. 4. : 파크골프장 확충계획 수립 / 23. 10. : 축구센터 건립 추진계획 수립

❍ 24. 5. : 체육회 간담회

❍ 24. 6. ~ 11. : 체육시설 세부협의(시행자, 체육회, 지역국회의원)

3) 향후 추진계획

❍ 24. 12 : 세부 체육시설 협의완료(시행자, 도시개발과, 지역국회의원, 체육회 등)

❍ 25.  4. : 개발계획 변경 협의(국토부), 실시설계용역 완료(도시개발과)

❍ 25.  5. : 체육시설 조성 착공

❍ 26. 12. : 체육시설 조성 완료