4-21	파크골프장 환경개선 및 확충(칠산 파크골프장 조성)
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 주신욱 / 3605
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2024. ~ 2025.

❍ 위    치 : 김해시 이동 760-8번지 일원

❍ 규    모 : 파크골프장 조성 1식(A=15,000m2)

❍ 총사업비 : 700백만원

❍ 사업내용 : 파크골프장 18홀 및 부대시설

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○사업추진 검토	○국비지원 공모사업 발굴 및 사업비 확보 ○행정절차 신청 (하천점용허가, 개발제한구역 행위허가) ○실시설계용역 완료	○행정절차 이행 완료(하천점용 허가, GB행위 허가) ○1회 추경 예산 확보 ○조성공사 시행	○조성공사 완료
추진율	5%	20%	60%	100%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘23.  6. : 실시설계 및 소규모환경영향 평가 용역 시행

❍ ’23. 10. : 소규모환경영향평가 협의 완료

❍ ‘23. 11. : 하천점용허가 신청

❍ ‘23. 12. : 실시설계용역 완료

❍ ’24. 10. : 25년 지방전환사업 선정(도비 210백만원)

❍ ‘24. 12. : 하천점용 및 GB행위허가 완료

3) 향후 추진계획

❍ ‘25.  2. : 공사 착공

❍ ‘25.  6. : 공사 완료