4-22-1	체육공원 정비 및 시설 확충[장유]
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 주신욱 / 3605
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. ~ 2027.

❍ 위    치 : 김해시 응달동 380-1번지 일원

❍ 규    모 : 체육공원 조성 1식(A=28,300㎡)

❍ 총사업비 : 17,000백만원(전환 3,600 시비 13,400)

- 공사비 11,600, 설계비 400, 보상비 5,000

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○실시설계 준비	○실시설계 착수	○보상 착수	○실시설계 완료 ○행정절차 완료(실시계획인가 등)	○보상 완료 ○공사 준공
추진율	5%	20 %	50 %	60 %	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘20.  6. : 기본계획 및 타당성검토 용역 완료

❍ ‘21.  7. : 경상남도 지방재정투자 심사

❍ ‘21.  9. : 공유재산심의회 심의

❍ ‘21. 12. : 도시관리계획(체육시설) 결정고시

❍ ‘23.  7. : 실시설계용역 착수

❍ ‘24.  7. : 25년 지방전환사업 신규사업 신청

❍ ‘24.  9. : 보상계획 열람공고

❍ ‘24. 10. : 25년 지방전환사업 선정 발표(미선정)

⇒ 부지 미확보에 따른 지방전환사업 미 선정.

❍ ‘24. 12. : 감정평가 실시

3) 향후 추진계획

❍ ‘25.  7. : 26년 지방전환사업 신청

❍ ’25. 12. : 실시설계 인가 등 행정절차 완료

❍ ‘26.  7. : 보상 완료 및 공사 착수

❍ ‘27. 12. : 공사 완료