4-23	대동면 복합스포츠타운 건립
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 이양규 / 3604
추진상황		일부추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. ~ 2027.

❍ 위    치 : 김해시 대동첨단산업단지 내

❍ 규    모 : 국민체육센터 1식(연면적 A=3,000m2)

❍ 총사업비 : 10,000백만원

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○공모사업 준비	○사업계획 수립 및 건축대상지 검토	○공모사업 신청 ○건축설계공모	○실시설계용역착수	○공사 착공

2) 주요 추진성과

❍ ‘19.  4. : 기본계획 및 타당성 검토용역 완료

❍ ‘23.  8. : 대동첨단산업단지 공공시설용지 협의(도시개발과)

❍ ‘24.  3. : 24년 1회 추경 예산확보(전략산업과/217억)

❍ ‘24.  6.  : 공공시설용지 매입(전략산업과/22,547㎡)  ※전략산업과에서 공공시설용지 일괄 매입

3) 향후 추진계획

❍ ‘25.  7.  : 공모사업 신청(문체부/생활체육시설 확충 지원사업)

❍ ‘26. ~   : 건축설계공모 및 행정절차 이행

❍ ‘27. 상반기 : 공사 착공

❍ ‘28. 하반기 : 공사 준공