4-26	반려동물 공원(수영장,놀이터) 조성
추진부서		공원녹지과 / 공원조성팀 / 오진주 / 6373
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(‘23) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2020. 6월 ~ 2025. 6월

❍ 위    치 : 김해시 어방동 984-2번지 일원(분산성 근린공원內)

❍ 규    모 : 약 15천㎡

❍ 사 업 비 : 3,300백만 원(공원조성비 2,000, 토지보상비 1,300)

❍ 총사업비 : 반려동물 놀이시설, 화장실, 주차장, 카페 등

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.
사업내용	○ 토지매입 ○ 각종 용역 및 사전절차 이행	○ 각종 용역 및 사전절차 이행	○ 공사 추진	○ 공사 완료 ○ 공원 개장
추진율	10%	20%	60%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ’20.  6. 26. : 실시계획 인가 고시

❍ ’22.  3.     : 경남도 특조금 결정(10억), 매장문화재 지표조사 용역 완료

❍ ’22.  4.     : 실시설계 용역 시행, 매장문화재 발굴(표본)조사 용역 시행 및 “중지”

※ 토지 및 지장물 보상 협의 지연으로 인한 문화재 관련 용역 중지

❍ ’22.  5. ~ 10. : 실시설계 용역 완료, 토지매입 완료, 선진지 견학 및 자문 등

❍ ’22. 11.     : 공사(토목, 전기, 정보통신) 발주 및 “중지” ※ 보상 지연으로 공사 중지

❍ ’23.  2.     : BF예비인증(진입로) 용역 시행

❍ ’23.  3.     : 지장물 보상완료, 매장문화재 발굴(표본)조사 용역 완료

❍ ’23.  5.     : 매장문화재 정밀발굴조사 용역 시행

❍ ’23.  9.     : 건축(카페, 화장실, 관리동) 설계 용역 시행

❍ ’23. 11.     : BF예비인증(진입로) 완료, 매장문화재 정밀발굴조사 용역 완료

❍ ’23. 12. ~ ’24. 4. : 설계 변경(BF예비인증 반영 등)

❍ ’24.  6. 17. : 반려동물 테마공원 조성공사 재개

3) 향후 추진계획

❍ ’25.  1.     : 건축(카페, 화장실, 관리동) 시행

❍ ’25.  5.     : 반려동물 테마공원 조성공사 및 건축 완료

❍ ’25.  6.     : 반려동물 테마공원 개장

❏ 기대효과

❍ 김해1호 반려견 놀이터로 숲 속에서 반려견이 마음껏 뛰어놀 수 있는 힐링 스팟 제공