4-30-1	상습침수지역 정비 및 배수개선사업 추진(장유 내덕지구)
추진부서		하수과/하수시설팀/ 박흥철 / 3974
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : ‘19. 11. ~ ‘25. 12.

❍ 위    치 : 김해시 내덕동 63-5번지 일원(장유 자동차학원 인근)

❍ 사업내용 : 빗물펌프장 1개소(Q=900㎥/분), 우수관로 정비 L=2.1㎞

❍ 총사업비 : 38,133백만원(국 26,636 기 3,489 시 8,008)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○공사 착공 - 가성토작업 - 빗물펌프장파일작업	○유수지 조성 - 유수지 조성 토공작업	○펌프장 신축 - 연약지반 개량공사 - 건축공사 및 기계공사	○공사 준공 (부대공사)	-
추진율	12%	25%	40%	100%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘22.  3. : 편입부지 보상 완료(4필지/11,295㎡)

❍ ‘22.  4. : 기본 및 실시설계용역 완료

❍ ‘22.  6. : 재원 협의 완료(낙유청)

❍ ‘22. 10. : 공사 착공

❍ ‘23.  9. : 연약지반 개량 공사 시행

❍ ‘24.  7. : 유수지 사면 및 가시설, 기초 보강 대책 수립
❍ ‘24.  9. : 실시설계도서 재설계 완료

❍ ‘24. 10. : 재원 재협의 요청(낙유청)

❍ ‘24. 12. : 설계변경 및 행정절차 이행 완료

3) 향후 추진계획

❍ ‘25.  5. : 유출 및 방류수로, 우수관로 정비공사 완료

❍ ‘25. 12. : 빗물펌프장 설치·가동 및 사업 준공

❏ 기대효과

❍ 상습침수 해소를 통해 시민의 생명과 재산권 보호

❍ 집중호우로 인한 재해 및 재난으로부터 도시 안전 기능 강화