4-31	도심하천 종주 둘레길 완성
추진부서		하천과 / 지방하천팀 / 차국원 / 3813
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. 1. ~ 2027. 12.

❍ 위    치 : 봉하마을 → 낙동강 → 해반천 → 장유누리길 → 장유암 일원

❍ 규    모 : 둘레길 조성 L=73km

❍ 총사업비 : 30억원(국비 53.3%, 시비 46.7%)
❍ 사업내용 : 바닥표시 73km, 안내표지판 100개소, 보도교 2개소

신책로 정비 L=4.3km

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기후
	2022. 7. ~	2023	2024	2025	2026	2027
사업내용	기본계획 수립	-	-	바닥표시 73km, 안내표지판 100개소	보도교1개소, 산책로정비 L=1.5km	보도교1개소, 산책로정비 L=2.8km
추진율	5%	5%	5%	15%	60%	100%

2) 연도별 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
계	3,000	20	-	-	-	200	1,500	1,480
국비	1,600	-	-	-	-	-	900	900
시비	1,400	20	-	-	-	200	600	580

3) 주요 추진성과

❍ 도심하천 종주 둘레길 완성을 위해 2021년 장유누리길 L=13.5km 완성

❍ 2022년 도심하천 종주 둘레길 L=73.0km 기본계획수립 완료

❍ 2023년, 2024년 개발제한구역 주민지원사업 공모(조만강 보도교)→미선정

4) 향후 추진계획

❍ ‘25.  1. : 둘레길 조성 실시설계용역 추진

❍ ‘25.  3. : 개발제한구역 주민지원사업 공모 신청

❍ ‘25.  6. : 바닥표시, 안내표지판 설치 완료

❍ ‘27. 12. : 둘레길 완성

❏ 기대효과

❍ 낙동강 본류와 지방하천을 연결하는 대규모 둘레길을 조성하여 지역의 문화자원과 연계하는 시민 휴식공간 조성 및 김해시 대표 관광지 조성