4-34-1	도시재생사업 추진(삼안동)
추진부서		도시디자인과 / 재생사업2팀 / 노준영 / 8733
추진상황		이행완료	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(’24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. ~ 2024.

❍ 위    치 : 김해시 삼방동 161-1번지 일원 (A=218,553㎡)

❍ 총사업비 : 26,910백만원 (국비 14,,136 특교 1,000 도비 2,827 시비 8,947)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비		2021년까지		2022년		2023년		2024년
	합계	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계 (추가시비)	26,910	23,560	활성화계획 수립 조직구성 및 사업계획 수립 등 개최 (인제공원주차장 조성사업외36개사업)	15,707 -	준공 및 프로그램 운영 축제 등 개최	9,688 (1,900)	준공 및 프로그램 운영, 축제 등 개최	2,794	전체 준공 및 운영	-2,178 (1,450)
		(3,350)
국 비 (균 특)	14,136	14,136		10,816		6,284		900		-3,864
도 비	2,827	2,827		2,537		884		179		-772
시 비	8,947	6,597 (2,350)		2,354 -		1,520 (900)		1,715 -		2,458 (1,450)
특교세	1,000	- (1,000)		-		- (1,000)		-		-

* ‘24년 구조조정에 따른 활성화계획변경 고시(’24.10.8)됨에 따라 총사업비(300억→235.6억)가 변경(국60, 도12%, 시28%)이었으며, 거점시설 사업비 증액분 포함 총액은 269.1억원임

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○거점시설 설계, 착공 및 준공 ○S/W사업 착수	○거점시설 준공 및 운영 ○S/W사업 완료	○거점시설 준공 및 운영	○거점시설 활성화 방안 검토 및 추진	※ 임기내 완료
추진율	60%	75%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘20. 12. : 삼방청년허브 준공

❍ ‘21. 12. : 삼방어울림센터, 신어아트센터 준공

❍ ‘22. ~  : 14개 S/W사업 진행중

※신어아트센터 소극장(2022.5.), 창업지원공방(2022.9.) 삼방어울림페스티벌(2022.11.) 등

❍ ‘22. 12 : 인제공원 공영주차장 조성사업 착공

❍ ‘23. 07 : 구조조정계획 보고 [인제지역공헌뉴딜센터, 어울림다리 사업제외]

❍ ‘23. 09. : 도시재생사업 추진사항 설명회 개최 [구조조정 예정사업 설명,

주민의견 : 어울림다리는 추진 검토 요청]

❍ ‘23. 10. : 국토부 구조조정 확정 통보

❍ ‘23. 12.

- 김해대지역공헌허브 및 쌈지주차장 조성사업 준공

- 인제대 및 김해대 연계 도시재생 S/W사업 완료

❍ ‘24. 02 : 도시재생사업 주민자치회 설명회 개최[구조조정 예정사업 설명, 어울                림다리 추진 불가 충분히 설명]

❍ ‘24. 03 : 활성화계획 변경(안)주민공청회 개최

❍ ‘24. 04. : 활성화계획 변경(안) 의회 의견 청취

❍ ‘24. 05. : 활성화계획 변경(안) 국토부 제출

❍ ‘24. 05. : 삼방 스마트돋움랩 거점시설 준공

❍ ‘24. 07. : 국토부 실무위원회 심의

❍ ‘24. 10. : 활성화계획 변경 승인 및 고시

- 인제지역공헌뉴딜센터, 어울림다리 사업제외

❍ ‘24. 11. : 인제공원 공영주차장 공사 준공

❍ ‘24. 12. : 전체사업 종료

3) 향후 추진계획

❍ ‘25. 01. : 거점시설 운영