4-4	부산-김해경전철 차량기지내 임시승강장 설치
추진부서		대중교통과 / 경전철지원팀 / 김태규 / 6584
추진상황		정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내 ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022년 ~ 2027년

❍ 위    치 : 부산-김해경전철 차량기지내 유치선(삼계동 655)

❍ 사 업 량 : 승강장 1개소 신설

❍ 사업방식 : 경전철 민간투자사업 실시협약에 따라 추진

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○민자 적격성 재조사	○타당성 재고 방안 연구 검토 ○임시승강장 검토 및 벤치마킹	○임시승강장 기본 및 실시설계 용역 ○공동주무관청 협의 ○인·허가 협의 ○건설비 예산확보		○인·허가 협의 ○승강장 준공 ○시험운행

2) 주요 추진성과

❍‘18. 12. : 신설 역 건설 및 운영 타당성조사 연구 용역 완료      * ㈜한국종합기술 수행

❍‘21.  8. : 역 신설 시스템 분야 검증연구 용역 완료         * ㈜현대로템 수행

❍‘21. 12. : 역 신설 민간투자사업 적격성 재조사 의뢰(→한국개발연구원)

❍‘22. 12. : 역 신설 민간투자사업 적격성 재조사 종합평가(AHP)

- 경제성분석(B/C) 결과 0.42(경제적 타탕성 판단기준 ‘1’이상일 경우 사업추진 가능)

- 종합평가(AHP) 점수 0.436으로 타당성 확보 못함

❍ ’23.  7. : 타 지자체 경전철 역사 유사시설 운영 개선사례 벤치마킹 및 실무협의

❍ ’24.  2. : 차량기지내 임시승강장 신설 추진 발표

❍ ’24.  5. : 차량기지내 임시승강장 기본 및 실시설계 용역 착수

(용역기간 : 2024. 6. ~ 2025. 12. / 용역비 : 781백만원)

3) 향후 추진계획

❍ `26.  2. : 차량기지내 임시승강장 기본설계 중간보고회 개최

❍ `26. 11. : 차량기지내 임시승강장 실시설계 최종보고 및 준공

❏ 기대효과

❍ 부산-김해경전철 차량기지 인근 주민들의 교통 편의성 제고 및 경전철 이용 활성화

❍ 삼계지역 대규모 공동주택 조성과 함께 대중교통 기반시설 확충으로 인구 유입 및 지역상권 활성화