4-5	장유여객터미널 조속 추진
추진부서		대중교통과 / 대중교통팀 / 전혜경 / 2892
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타	완료시기	■ 임기내(‘23) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2017 ~ 2023

❍ 위    치 : 김해시 장유무계지구 도시개발구역 7BL

❍ 규    모 : 부지 10,656㎡(터미널 3,952) / 상업시설 5층, 터미널 4층

❍ 총사업비 : 840억 원(터미널 130억 원)  * 민간개발사업
❍ 사업내용 : 근린생활시설, 터미널 시설(계류장, 매표소, 대합실, 주민편의시설)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○공사중 ○지상3층 콘크리트 바닥 완료 ○지하 1~2층 설비, 전기,배관 작업	○각층 손보기 작업 ○준공	○터미널 기부채납 ○공영터미널 운영을 위한 시설 보완	-	-
추진율	60%	80%	100%	100%

2) 주요 추진성과

❍ '21. 06. 24. : 건축허가 변경(상업시설 축소, 20층→5층), ⁕ ’20.2.28 건축허가

❍ '21. 10. 07. : 공사시행인가 처리

❍ '21. 12. 08. : 착공 /‘24. 03. 28. : 건축물 사용승인

❍ '24. 05. 23. : 기부신청서 제출

❍ '24. 07. 18. : KB부동산신탁사 ㈜삼호디엔티 권한 박탈 및 ㈜두진건설 위임 통지

❍ '24. 08. 23. : 원가산정 및 운영활성화를 위한 용역 시행 /'24. 11. 05. 용역 완료

❍ '24. 10. 23. : 공유재산심의회 심의

❍ '24. 12.     : 의회 (취득)관리계획 동의

3) 향후 추진계획

❍ '25. 01. : 기부채납(이전 등기절차 완료)

❍ '25. 03. : 터미널 시설 보완 및 관련 조례 제정

❍ '25. 05. : 터미널 관리위탁 공고 및 터미널 운영 위탁

❍ '25. 06. : 개소식 및 시설 운영

❏ 기대효과

❍ 장유지역 안정적 공영터미널 운영으로 대중교통 이용 시민 편의 증진 도모