5-1	김해공공의료원 설립(의료원 내 아동전문병원 설치)
추진부서		보건관리과 / 의약팀 / 박재윤 / 4502
추진상황		정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 ■ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2023년 ~ 계속

❍ 위    치 : 서김해ic 일원

❍ 규    모 : 300병상 정도(종합병원)

❍ 사업방식 : 국가재정사업 또는 임대형 민간투자(BTL) ‣기획재정부 예․타조사 통해 결정

❍ 총사업비 : 2,000억원 정도 ‣타당성조사 통해 총사업비 추계

※ 재원분담 : 건축비(국비 50%, 지방비 50%), 장비비(국비 50억원 한도), 부지제공(김해시)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○설립 타당성조사 용역비 확보	○용역 계약 및 착수 ○민관협력 추진위원회 구성 ○용역 착수, 중간(1,2차)보고	○용역 완료 ○사업계획서 제출 (보건복지부) ○예비타당성 조사 신청(기획재정부)	○BTL 또는 국가 재정사업 추진 -사업계획 적정성 검토(기재부,KDI) -지방재정 중앙 투자심사(행안부)	○건립계획안 수립 및 공공건축물 사전검토 ○부지 예산 확보 및 매입 등
추진율	1%	10%	30%	50%	100%

2) 주요 추진성과

❍‘22. 08. : 공공의료원 TF팀 구성

❍‘22. 09. : 시장님→도지사 방문, 김해공공의료원 설립 건의

❍‘22. 09. : 경남도 협의, 용역 추진주체(김해시), 용역비 50:50 분담

❍‘22. 11. : 입지후보지 5개소 시장님 보고 3곳 선정‣풍류물류단지(1순위)

❍‘22. 12. : 타당성조사 용역비 2023 당초 예산 확보

❍‘23. 02. : 용역 계약 및 착수 ‣시행사: 한국보건산업진흥원, 용역기간: ’23. 2.~‘24. 2.

❍‘23. 04. : 용역 착수보고회 개최, 민관협력 추진위원회 구성 ※실무협의체(도)

❍‘23. 05. : 용역사 후보지 현장 방문 및 검토 의견서 제출

❍‘23. 10. : 부지 선정 평가위원회 개최

❍‘23. 11. : 부지 선정 완료 및 1차 중간보고회 개최

❍‘24. 02. : 부지 현안 문제를 위한 정책 컨퍼런스 개최

❍‘24. 03. : 2차 중간보고회 개최

❍‘24. 12. : 공공의료원 타당성 조사 최종보고회 및 용역완료

3) 향후 추진계획

❍‘25. 04. : 보건복지부 사업계획서 제출(지방의료원 설립 심의위원회)

❍‘26. 01. : 기획재정부 예비타당성 조사 신청