5-13	진영권역종합사회복지관 건립
추진부서		복지정책과 / 복지정책팀 / 오경아 / 3285
추진상황		정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내 ■ 임기후(‘28)

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2023. 3. ~ 2026.

❍ 위    치 : 진영한빛도서관 부지 외 2필지

❍ 시설형태 : 종합사회복지관(노인, 장애인 등 다양한 복지수요 충족)

❍ 건축규모 : 지상3층 1동,  연면적 4,331㎡

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내
	23. 3. ~ 23. 12.	24. 1. ~ 24. 12.	25. 1. ~ 25. 12.	26. 1. ~
사업내용	○ 건립 타당성 및 기본계획 수립 용역 ○ 지방재정 투자심사 ○ 공유재산 심의	○ 부지매입 ○ 도시관리계획결정 변경 ○ 건축기획설계 용역 ○ 공공건축 사업계획 사전검토(도) ○ 공공건축심의위원회 심의	○ 설계공모 ○ 기본 및 실시설계	○ 착공

2) 주요 추진성과

❍ 건립 타당성 및 기본계획 수립 용역 실시	:	‘23. 3. 27. ~ 8. 24.
❍ 건립 타당성 및 기본계획 수립 용역 최종보고	:	‘23. 8. 4.
❍ 진영권역종합사회복지관 기본계획 수립	:	‘23. 8. 25.
❍ 지방재정 투자심사 및 공유재산 심의 완료	:	‘23. 10.
❍ 토지매입을 위한 감정평가액 결정 및 협의	:	‘24. 1. 26.
❍ 토지 매입(진영읍 여래리 689)	:	‘24. 3. 4.
❍ 도시관리계획(진영읍 여래리 689) 변경	:	‘24. 3. 31.
❍ 건축기획설계 용역 실시	:	‘24. 3. ~ 10.
❍ 공공건축 사업계획 사전검토(도) 완료	:	‘24. 7. ~ 8.
❍ 공공건축심의위원회 심의(시) 완료	:	‘24. 9. ~ 10.

3) 향후 추진계획

❍ 설계공모                                          :  ‘24. 11. ~ ’25. 1.

❍ 기본 및 실시설계                                  :  ‘25.  3. ~ 11.

❍ 착공                                              :  ’26.  1.

❍ 준공                                              :  ’28.  3.

❍ 진영권역 종합사회복지관 개관                      :  ’28.  6.