5-18	김해 모산 유아친화형 국민체육센터 건립
추진부서		교육체육국 / 체육지원과 / 이양규 / 3604
추진상황		정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(‘25) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2024년 ~ 2027년

❍ 위    치 : 모산공원(장유동 973번지 일원)

❍ 규    모 : 지하1층~지상2층, 부지면적 2,500㎡, 연면적 1,500㎡(건축면적 800㎡)

❍ 사 업 비 : 10,000백만원(국 3,000, 도 750, 시 6,250)

❍ 주요시설 : 실내놀이터, 수영장(유아풀), 다목적체육관, 다목적실, 휴게실 등

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내					임기 후
	2022.	2023.	2024.	2025.		2026.~
사업내용	-	-	○공모신청 및 선정 ○행정절차 이행 (공유재산, 중기 지방재정)	○설계공모 ○실시설계 용역 ○행정절차 이행 (설계경제성 및 타당성 검토, 건축인허가, 에너지인증, 계약심의 등)		○공사착공 ○공사준공(‘27)
추진율	0%	0%	3%	20%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘22. 10. : 어린이 실내놀이터 건립 추진계획

❍ ’23. 10. : 시의회 공유재산관리계획 동의

❍ ‘24.  2. : 공원조성계획변경결정 심의

❍ ’24.  3. : “김해 모산 유아친화형 국민체육센터 건립” 공모사업과 연계‧협의 추진

❍ ‘24.  4. : 공모사업 추진 방침, 기본계획 및 타당성 용역

❍ ’24.  5. : 지방재정영향평가(김해시/조건부 통과)

❍ ‘24.  7. : 공모사업 신청

❍ ’24.  9. : 공모사업 선정(문화체육관광부)

3) 향후 추진계획

❍ ’25.  1. : 건축설계공모

❍ ‘25.  4. : 실시설계용역 착수

❍ ’25. 12. : 실시설계용역 및 행정절차 완료

(설계 경제성‧안정성 검토, 건설기술심의, 에너지인증, 실시계획인가 등)

❍ ‘26. 상반기 : 공사 착공

❍ ’27. 하반기 : 공사 준공

❏ 기대효과

❍ 생애 초기 다양한 신체활동이 가능한 실내 체육시설을 조성하여, 아동의 놀

권리를 보장하고, 신체적‧정신적 발달 도모