5-2	진례보건지소 신축
추진부서		보건관리과(서부) / 보건행정팀 / 박선미 / 7973
추진상황		이행완료	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘23) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 2. ~ 2023. 6.

❍ 위    치 : 진례면 송정리 22외 1필지

❍ 규    모 : 대지면적 1,254㎡, 연면적 658.33㎡ (지상2층)

❍ 사 업 비 : 2,404백만 원(국 823 도 205 시 1,376)

❍ 사업내용 : 노후화된 진례면 보건지소를 이전 신축하여 주민 건강증진 참여 공간 확충

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내
	2022. 7. ~	2023.
사업내용	- ‘22. 1.~10.: 관련법규 검토 및 실시설계 - ‘22. 11.: 공사 계약 - ‘22. 12.: 공사 착공	- ‘23. 6.: 공사준공 - ‘23. 7.: 개소예정
추진율	30%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘21. 7.~11  : 공공건축심의 및 계획설계용역 완료

❍ ‘21. 12.    : 한국건강증진개발원 계획설계 심의 완료

❍ ‘22. 1.~ 7. : 관련법규 검토 및 실시설계 완료

❍ ‘22. 8.~11. : BF 예비인증 및 공사 입찰

❍ ‘22. 12.    : 공사 착공

❍ ‘23. 8.     : 공사 준공

❍ ‘23. 11. 1. : 진례면보건지소 개소

❏ 기대효과

❍ 공공보건의료기관의 시설개선으로 지역주민의 건강권 보장 및 건강증진 도모