6-16	봉황동유적 확대정비 및 가야왕궁 복원 추진
추진부서		문화유산과 / 문화유산복원팀 / 공연경 / 4663
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2007. ~ 2030.

❍ 위    치 : 봉황동 316번지 일원

❍ 규    모 : 110,326㎡ → 확대정비 133,201㎡(증 22,875㎡)

❍ 내    용 : 부지매입, 발굴조사, 발굴 보호시설 건립, 왕궁복원 등

❍ 총사업비 : 200,000백만원(국비 140,000, 도비 28,896, 시비 31,104)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 토지보상 완료 ○ 발굴체험관 기본구상 및 타당성 조사	○ 보상지 철거공사 실시설계	○ 철거공사 시행 ○ 문화유산 조사 ○ 환경정비 착수	○ 발굴체험 관리센터 착공 및 준공 ○ 환경정비	○ 종합정비계획 수립 ○ 왕궁터 복원
추진율	20%	30%	40%	50%	100%

2) 주요 추진성과

❍ ‘15.  9. : 가야왕궁터 발굴을 위한 학술자문회의 및 발굴조사 시행

❍ ‘18. 10. : 보호구역 추가지정 (70필지 10,283㎡)

❍ ‘21.  5. : 국가사적 및 보호구역 추가 지정 [구)봉황초, 12,592㎡]

❍ ‘22. 12. : 수용 재결(13필지, 1,575㎡)에 따른 보상 및 공탁완료

❍ ‘23.  3. : 구)봉황초 보상완료

❍ ‘23.  6. : 봉황동유적 확대 지정부지 보상완료

❍ ‘24.  7. : 지장물 철거공사 착수

❍ ‘24. 11. : 지장물 철거공사 완료

❍ ‘24. 12. : 문화유산 조사 용역 및 환경정비 착수

3) 향후 추진계획

❍ ‘25.       : 문화유산 조사 완료, 발굴체험 관리센터 공사 완료 및 환경정비

❍ ‘26. ~ ‘30.  : 종합정비계획 수립 및 가야왕궁터 복원