6-18	진례도예촌 활성화
추진부서		도시계획과 / 도시정비팀 / 정재용 / 4843
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타	완료시기	□ 임기내 ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2018. ~ 2033.

❍ 위    치 : 김해시 진례면 신월리 일원(신월역 주변)

❍ 규    모 : 약1.0㎢(도예촌 약9.1만㎡)

❍ 사 업 비 : 7,713억원

❍ 시행방식 : 도시개발사업(수용 및 사용방식, 제3섹터)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	기술타당성 검토 (진례 도예촌 조성)	○개발방안 및 기본구상(안) 수립 (진례 신월역세권)	○GB 지역전략사업 선정 추진 (진례 신월역세권 연계 추진)	○민간사업자 공모	○GB해제 입안
추진율	-	5%	10%	20%	100%

2) 주요 추진성과

【진례 분청 도예촌 조성】

❍ ’21.  9. : 경남개발공사 자체 타당성 검토 실시

❍ ’21. 11. : 양해각서 체결(김해시↔경남개발공사)

❍ ’21. 12. : 기술타당성 검토·기본구상(안) 수립 착수(경남개발공사)

❍ ’24.  3. : 사업 추진방안 협의(김해시↔경남개발공사)

❍ ’24.  4. : 사업추진 촉구 요청에 대한 회신(경남개발공사→김해시)

【진례 신월역 개발】

❍ ’23.  2. : 진례 신월역 주변 개발방안 수립 용역 착수

❍ ’24.  5. : 지역전략사업 신청(김해시→경남도→국토교통부)

☞ 진례 분청 도예촌 조성사업과 연계 추진

❍ ’24.  6. : 지역전략사업 사업설명 및 협의(국토부 녹색도시과)

❍ ’24.  7. : 개발제한구역 해제 지역전략사업 평가 제안설명(국토연구원)

❍ ’24.  8. : 현장실사(국토연구원 검토위원회)

❍ ’24. 7. ~ 9. : 검토위원회 평가(국토연구원)

3) 향후 추진계획

❍ ’24. 11. : 중앙도시계획위원회 심의

❍ ’24. 12. : 국무회의 의결 (사업 확정)

❍ ’25.  5. : 도시관리계획(개발제한구역) 결정(변경) 용역 착수

* 용역비 1회 추경 반영

❍ ’25.  8. ~ ’26.  7. : 민간사업자 제안 및 공모, SPC 설립

❍ ’26.  9. ~ ’27. 12. : 개발제한구역 해제 입안 및 승인(승인권자 : 경상남도)

❍ ’28.  1. ~ ’29.  1. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 승인(지정권자 : 김해시장)

❍ ’29.  7. : 실시계획 승인 및 보상 착수

❍ ’30.  7. : 부지조성 공사 착공(준공 : 2033. 12.)

※ GB해제 지역전략사업 미선정 시 : GB총량 내 사업으로 추진