(4-3) 부전-마산복선전철 신월역 조기 완공

추진부서(팀명)	대중교통과(경전철지원팀)	완료시기	□임기내(‘25) ■임기후
담당자(전화번호)	김판영(330-6583)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 신월역을 조기 완공하여 지역주민 교통편의 제공 및 지역발전 촉진

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 :  ‘17. 8월 ~ ’26. 8월

⃝ 위    치 : 김해시 진례면 산본리 729번지 일원

⃝ 규    모 : 역사 1개소, 역사 부대시설

⃝ 사 업 비 : 446억 원(국비 51억 원, 원인자 395억 원)
⃝ 사업내용

先 시행분(완료)	설계, 노반, 지하연결통로	스마트레일 시행(86억원)
後 시행분(추진중)	역사, 시스템, 진입도로 등	국가철도공단 위탁시행

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	역사 보완설계 및 교통영향평가 문화재시굴조사	문화재정밀조사 역사보완설계 및 인허가 추진	역사보완설계 완료 사업발주 및 계약(공단)	後 시행분 착공 (건축, 시스템, 진입도로 등) 後 시행분 공사	後 시행분 시운전 및 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	44,605	21,300	-	3,000	3,000	9,265	8,040
국 비	5,065	3,800	-	-	-	1,265	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	39,540	17,500	-	3,000	3,000	8,000	8,040
민 자	-	-	-	-	-	-	-

□ 기대효과

⃝ 김해 서부지역의 광역 교통수요자 교통편의 제공 및 주변 지역발전 촉진